109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 해남군에서 ‘17년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2016년까지 집행사업비	2017년 소요사업비	2018년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지진척율(%)
송호항 지방어항 건설	8,800	6,000	2,300	500	2018	2010	95
우수영항기반시설 구축사업	9,030	6,800	360	1,870	2019	2011	80
해남군 도시가스 공급사업	11,469	10,469	516	484	2020	2012	90
훔진갈비-한국병원간 도시계획도로개설공사	4,100	4,100			2017	2013	100
고천암 자연 생태공원조성사업	22,040	7,778	2,922	11,340	2020	2009	53
마산 농공단지 조성사업	19,500	11,467	8,033		2017	2011	100
삼산지구 농어촌 생활용수 개발사업	8,736	5,604	1,928	1,204	2018	2011	85
삼산 매정 농어촌 마을하수도정비공사	2,432	2,010	422		2018	2013	100
땅끝 해양자연사 박물관 건립사업	9,770	3,316	3,064	3,390	2018	2007	97
옥천 공공하수처리 시설 및 하수관거 정비공사	17,849	12,753	3,519	1,577	2018	2013	95
서남권광역화장장 건립사업	6,215	6,215			2018	2013	55
해남군 공설추모 공원조성사업	6,738	6,738			2018	2013	95
화원 절골–송촌간 도로 확포장공사	3,800	2,600	662	538	2018	2014	90
화산 송계–안정간 확포장공사	2,600	1,200	578	822	2018	2014	98
해남 안동–남송간 확포장공사	3,400	300	113	2,987	2020	2014	15
해남읍 매일시장 현대화시설조성	9,500	3,758	657	5,085	2020	2015	66
땅끝해남 치유의 숲 조성사업	3,800	56	128	3,616	2019	2015	5

사업명	총사업비	2016년까지 집행사업비	2017년 소요사업비	2018년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지진척율(%)
해남 송지면 사무소 청사 신축	4,216	1,881	984	1,351	2018	2015	68
해남 어린이청소년 도서관 건립	4,265	1,000	1,100	2,165	2018	2015	10
해남군 청사 이전	48,300	5,979	6,509	35,812	2021	2015	29
해남군 소각시설 대보수	13,370	318	2,901	10,151	2018	2017	40
해남 국화향연	853		287	566	계속	2017	65
옥천도림-용심간농어촌도로 확포장공사	3,500		60	3,440	2020	2017	5
해남 황산면 사무소 청사신축	3,000			3,000	2019	2017	10
해남터미널인근 공영주차장 조성	2,900		1,798	1,102	2018	2017	60
땅끝관광지(송호지구)주차장 조성	2,400		2,241	159	2018	2017	88
송지 학가 지방어항 정비사업	9,000	87	704	8,209	2021	2017	10
군=>읍면=>마을간전화방송시스템구축	2,005		2,005		2017	2017	100
신명A~5일시장(1주차장)간도시계획도로개설	1,300		1,200	100	2018	2016	95

개별 투자심사 사업 추진현황 : 별첨 9

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

우리 해남군에서 ‘17년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

10-2. 지방채 발행사업

우리 해남군에서 ‘17년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 해남군에서 ‘17년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.

별첨 9	개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

송호항 지방어항 건설

담당자

해양수산과 천일준(☎530-5419)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지방어항 정비로 수산업 기반시설 확충 및 수산경쟁력 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011 ~ 2018

○ 위 치 : 해남군 송지면 송호항

○ 규 모 : 방파제 및 물양장 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	8,800	6,000	2,300	500
국 비	7,040	4,800	1,840	400
시 도 비	500	500
시군구비	1,260	700	460	100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 부지 조성 및 물양장 신설 완료

○ 방파제 L=300m 설치 완료

□ 향후계획

○ 항내 부잔교 설치 1개소

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경

(당초) 8,300백만원 ⇒ (현재) 8,800백만원

사업명

우수영항 기반시설 구축사업

담당자

해양수산과 천일준(☎530-5419)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지방어항 정비로 수산업 기반시설 확충 및 수산경쟁력 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012~2019

○ 위 치 : 해남군 문내면 우수영항

○ 규 모 : 부지 매립, 대체어항 조성 및 진입로 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,030백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	9,030	6,800	360	1,870
국 비	600	400	200
시 도 비	300	300
시군구비	8,130	6,100	160	1870
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 부지 및 물양장 조성 완료

○ 우수영항 부지 보수보강

□ 향후계획

○ 대체어항 및 진입도로 개설

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

해남군 도시가스 공급사업

담당자

지역개발과 김선경(☎530-5877)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시가스 보급률 제고 및 에너지 비용 절감효과

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012년 ~ 2018년

○ 위 치 : 해남군 해남읍 일원

○ 규 모 : 공급관 L=31.907km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,469백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	11,469	10,469	516	484
국 비
시 도 비	400	400	0	0
시군구비	5,356	4,846	263	247
지 방 채
민간자본	5,713	5,223	253	237
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 90%)

○ 2011년~2016년 : 공급관 31.907km 설치

○ 2012년 : 지구정압기 1개소, 지역정압기 2개소 설치완료

○ 2017년 : 공급관 L=2.147km 추진중

□ 향후계획

○ 해남읍 도시가스 공급관 미보급지역 추가 공급

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

훔친갈비~한국병원간

도시계획도로 개설공사

담당자

지역개발과 윤찬하(☎530-5357)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해남읍 시가지 도로망 확충으로 교통난 해소 및 주민교통 편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2017

○ 위 치 : 해남군 해남읍 해리 일원

○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=450m, B=15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,100	4,100
국 비
시 도 비
시군구비	4,100	4,100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2014. 8. 22. : 실시설계용역 준공

○ 2015. 6. 26. : 시설공사 착공

○ 2017. 9.  5. : 시설공사 준공

□ 향후계획

○ 도시계획도로 지속적인 유지관리

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

고천암 자연생태공원 조성사업

담당자

환경교통과 김창남(☎530-5333)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해남군 고천암호 일대에 자연생태공원을 조성하여 자연과 사람이 공존하고

생태적으로 안정된 곳으로 조성하여 지역경제를 활성화하고, 해남의 새로운

관광지로의 브랜드 가치를 창조하고자함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2009 ~ 2020

○ 위 치 : 해남군 고천암호 일원(해남내사, 화산연곡‧율동, 황산원호‧송호‧한자)

○ 규 모 : 공원조성 47,794㎡, 에코센터, 갈대탐방로, 철새탐조시설, 생태복원시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,040백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	22,040	7,778	2,922	7,287	4,053
국 비	11,020	3,200	1,157	3,643	3,020
시 도 비
시군구비	11,020	4,578	1,478	3,644	1,320
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 53%)

○ 시설공사 1~4차 완료

- 조류관찰센터 및 탐방로(1,520m), 생태수로 4개, 습지 1개, 물골 13개,

에코센터 공원조성, 연꽃습지(2,000㎡), 갈대탐방로 기초

□ 향후계획

○ 에코센터 건축계획 축소 변경에 따른 사업계획 변경

○ 시설공사 5차, 6차분 추진

- 에코센터 공원조성(17,388㎡)‧건축 1동, 갈대탐방로 데크설치(680m)

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

마산농공단지조성사업

(땅끝해남 식품특화단지 조성사업)

담당자

지역개발과 박인석(☎530-5658)

□ 사업목적 및 필요성

○ 식품가공기업 유치로 지역농산물 판로 확보 및 고용창출을 위한 지역특화       농공단지를 조성하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2017

○ 위 치 : 해남군 마산면 상등리 1114번지 일원

○ 규 모 : 138,596㎡, 지구외 준용시설: 3,970㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	19,500	11,467	8,033
국 비	10,968	2,935	8,033
시 도 비	419	419
시군구비	8,113	8,113
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2012.  8.  7. : 지정승인

○ 2013.  3. 22. : 조성사업 착공

○ 2014. 10. 30. : 조성사업 준공

○ 2017. 11. 21. : 폐수처리시설 준공

□ 향후계획

○ 특화단지 잔여부지 분양을 통해 지역경제 활성화에 기여

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

삼산지구 농어촌 생활용수 개발사업

담당자

상하수도사업소 문지형(☎531-3672)

□ 사업목적 및 필요성

○ 식수난을 겪고 있는 농어촌 지역에 안정적인 지방상수도 공급을 위한         시설 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011 ~ 2018

○ 위 치 : 해남군 삼산면 일원

○ 규 모 : 배수관로 18.8km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,736백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	8,736	5,604	1,928	1,204
국 비	6,115	3,948	1,100	1,067
시 도 비	786	508	141	137
시군구비	1,834	1,147	687
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

○ 배수관로 설치 L=18.8km, 가압장 설치 1개소

□ 향후계획

○ 삼산면 9개 마을 지방상수도 공급

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

삼산 매정

농어촌마을하수도 정비공사

담당자

상하수도사업소 임재원 (☎531-3682)

□ 사업목적 및 필요성

○ 삼산면 매정리에서 발생되는 생활하수를 차집처리하여 방류수역의 수질오염 방지, 공중보건위생 향상 및 쾌적한 주거환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간: 2015. 6. 29. ~ 2017. 10. 19.

○ 위 치: 삼산면 매정마을 142가구

○ 규 모: 하수처리시설 100㎥/일, 하수관로 L=6.4km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 2,432백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,432	2,010	422
국 비	1,702	1,407	295
시 도 비
시군구비	730	603	127
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 100%)

○ 공공하수처리시설(100㎥/일) 설치 완료

○ 매정마을, 142가구 가정관로 매설 완료

○ 시설공사 준공: ‘17. 10. 19.

○ 사용개시 공고: ‘17. 7. 18.

□ 향후계획

○ 위탁업체를 통한 하수처리 시설 운영 관리

사업명

땅끝 해양자연사박물관 건립

담당자

문화관광과 송재훈(☎530-5228)

□ 사업목적 및 필요성

○ 다양한 해양생물의 역사와 신비체험이 가능하고 소중한 해양유물을 전시

할 수 있는 규모 있는 박물관 조성

○ 전시 및 탐방학습 등 복합기능 수행이 가능한 해양자연사 교육장 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2009. ~ 2018.

○ 위 치 : 해남군 송지면 송호리 1123-3번지 일원

○ 규 모 : 연면적 2,462㎡(지상 2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  9,770백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	9,770	3,316	3,064	3,390
국 비	4,000	1,400	1,532	1,068
시 도 비
시군구비	5,770	1,916	1,532	2,322
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 97%)

○ 기반공사 완료(진입도로, 매립 등) : 2016. 1.

○ 전시물 제작 및 설치 착수 : 2017. 10.

○ 건축공사 준공 : 2018. 4.

□ 향후계획

○ 전시물 제작 및 설치 완료 : 2018. 9.

○ 땅끝 해양자연사박물관 개관 : 2018. 11.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

옥천 공공하수처리시설

및 하수관거 공사

담당자

상하수도사업소 임재원

(☎531-3682)

□ 사업목적 및 필요성

○ 영춘 등 7개 마을에서 발생되는 생활하수 및 농공단지 폐수를 차집 처리하여 방류수역의 수질오염 방지, 공중보건 위생 향상 및 쾌적한 주거환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간: 2015. 5. 28. ~ 2018. 7. 10.

○ 위 치: 해남군 옥천면 영춘 등 7개 마을, 농공단지

○ 규 모: 하수처리시설 430㎥/일, 하수관로 L=18.5km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,849백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	17,849	12,753	3,519	1,577
국 비	12,494	8,927	2,463	1,104
시 도 비	535	382	106	47
시군구비	4,820	3,444	950	426
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 하수처리장(토목,건축) 설치 및 차집관로 매설완료

□ 향후계획

○ 준공 및 사용개시 공고: 2018년 7월 중

○ 위탁업체를 통한 하수처리시설 운영 관리

사업명

서남권 광역화장장 건립사업

담당자

주민복지과 김동현(☎530-5916)

□ 사업목적 및 필요성

○ 3개군 광역화장장 조성을 통한 장사시설 이용 주민편익 증진 및

지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2017

○ 위 치 : 해남군 황산면 원호리 산159-1 일원

○ 규 모 : 화장장(화장로 3기), 봉안당

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,215백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	6,215	6,215
국 비	5,592	5,592
시 도 비
시군구비	623	623
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

○ ‘13. 10.: 전남도 지방재정 투자심사

○ ‘13. 11.: 해남군 중기지방재정계획 반영

○ ‘16. 12.: 착 공

○ ‘18. 8.: 공정율 55%(화장장–완료 / 봉안당-기초공사)

□ 향후계획

○  ‘18. 12.: 봉안당 완료

□ 사업변경 내역

○ 지역개발사업구역 및 실시계획 변경(사업기간)

- 당초: 2013년 ~ 2017년

- 변경: 2013년 ~ 2018년

사업명

해남 공설추모공원 조성사업

담당자

주민복지과 김동현(☎530-5916)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장례문화의 능동적 대처를 위한 장사시설 조성으로 해남군민의 이용편익       증진 및 국토의 효율적 활용

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2017

○ 위 치 : 해남군 황산면 원호리 산159-1 일원

○ 규 모 : 87,886㎡(봉안당, 자연장지 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,738백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	6,738	6,738
국 비	3,570	3,570
시 도 비	459	459
시군구비	2,709	2,709
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ ‘13. 10.: 전남도 지방재정 투자심사

○ ‘13. 11.: 해남군 중기지방재정계획 반영

○ ‘16. 12.: 착 공

○ ‘18. 8.: 공정율 95%

□ 향후계획

○  ‘18. 9.: 준공 및 개원

□ 사업변경 내역

○ 지역개발사업구역 및 실시계획 변경(사업기간)

- 당초: 2013년 ~ 2017년

- 변경: 2013년 ~ 2018년

사업명

화원 절골-송촌간 도로확포장공사

담당자

안전건설과 허순안(☎530-5829)

□ 사업목적 및 필요성

○ 원활한 농수산물 운송로 구축 및 도로정비를 통한 주민 불편해소와

교통사고 예방

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 11.24. ~ 2018. 3.25.(공사 정지중)

○ 위 치 : 해남군 화원면 후산리일원

○ 규 모 : 도로확포장 L= 2.83km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,800	2,600	662	538
국 비
시 도 비
시군구비	3,800	2,600	662	538
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 1,2,3차분 준공, 4차분 진행중

○ 생태통로 설치중

□ 향후계획

○ 도로 방호시설 설치

○ 4차분 준공

사업명

화산 송계-안정간 도로확포장공사

담당자

안전건설과 김영환(☎530-5489)

□ 사업목적 및 필요성

○ 원활한 농수산물 운송로 구축 및 도로정비를 통한 주민 불편해소와

교통사고 예방

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 03. 24 ~ 2018. 01. 08

○ 위 치 : 해남군 화산면 송계리일원

○ 규 모 : 도로확포장 L= 1.899km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,600	1,200	578	822
국 비
시 도 비
시군구비	2,600	1,200	578	822
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 98%)

○ 1차분 준공, 2차분 진행중

○ 도로방호시설 설치

□ 향후계획

○ 차선도색, 표지판 설치

○ 2차분 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

해남 안동-남송간 도로확포장공사

담당자

안전건설과 허순안(☎530-5829)

□ 사업목적 및 필요성

○ 원활한 농수산물 운송로 구축 및 도로정비를 통한 주민 불편해소와

교통사고 예방

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 12. 31 ~ 2020. 11. 12

○ 위 치 : 해남군 해남읍 안동리, 남송리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L= 1.875km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,400	300	113	300	2,687
국 비
시 도 비
시군구비	3,400	300	113	300	2,687
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 1차분 준공, 2차분 진행중

○ 벌목제근, 표토제거작업 시행

□ 향후계획

○ 토지보상완료 후 표토제거 및 노상, 노체 다짐실시

○ 구조물 설치

사업명

해남읍 매일시장 현대화 시설조성

담당자

지역개발과 이대열(☎530-5352)

□ 사업목적 및 필요성

○ 매일시장 재건축을 통하여 시장이미지를 개선하고 상권 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2020

○ 위 치 : 해남군 해남읍 읍내리 50번지 일원

○ 규 모 : 지상 2층(부지3,365㎡ / 연면적 2,321㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	9,500	3,758	657	1,913	3,172
국 비	4,620	600	541	1,259	2,220
시 도 비
시군구비	4,880	3,158	116	654	952
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 66%)

○ 매입대상 필지 24필지 중 16필지 매입

○ 군계획시설 실시계획 인가에 따른 관계부서 협조 요청

□ 향후계획

○ 군계획시설 실시계획인가(8월중) 후 미협의토지에 수용절차 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

땅끝해남 치유의 숲 조성사업

담당자

산림녹지과 맹종호 (☎530-5738)

□ 사업목적 및 필요성

○ 가학산의 풍부한 산림자원을 활용한 산림체험과 자연학습이 가능한 치유의 숲 조성으로 체류할 수 있는 공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2019

○ 위 치 : 해남군 계곡면 가학리 산1번지

○ 규 모 : 50ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,800	56	128	676	2,940
국 비	1,900	28	64	338	1,470
시 도 비
시군구비	1,900	28	64	338	1,470
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 사업 계약체결: `18. 1. 24.

○ 지반정비

□ 향후계획

○ 산림청·전남도 협의 및 설계변경 완료 후 사업재개: `18. 9.

○ 준공 및 개장: `20. 1.

사업명

해남 송지면사무소 청사 신축

담당자

재무과 강아영(☎530-5276)

□ 사업목적 및 필요성

○ 구) 면청사는 1978년 건축된 노후건물로 2013. 5. 건물안전진단결과 D등급 판정

○ 면민들의 편의시설 확충과 면 업무 수행의 생산성 제고를 위하여 새롭게 청사 신축의 필요성 대두

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2018

○ 위 치 : 해남군 송지면 산정리 772-3

○ 규 모 : 부지면적 4,789㎡ / 건립규모 991㎡(지상 2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,216백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,216	1,881	984	1,351
국 비
시 도 비
시군구비	4,216	1,881	984	1,351
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 68%)

○  편입토지 매입 : 2015. 12.

○  기본 및 실시설계 완료 : 2016. 12.

○  공사착공 : 2017. 4.

○  공사준공 : 2018. 5.

□ 향후계획

○  공사준공 : 2018. 5.

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음.

사업명

해남 어린이·청소년 도서관 건립사업

담당자

문화관광과 최정순(☎530-5919)

□ 사업목적 및 필요성

○ 1984년 해남공공도서관 개관 이후 꾸준한 장서 증가와 학생 방과 후 프로그램

수요, 지역주민 평생교육 프로그램 수요가 늘어남에 따라 시설 확장 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2018

○ 위 치 : 해남군・읍 구교리 347번지 외 1

○ 규 모 : 어린이·청소년 도서관 건립 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,265백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,265	1,000	1,100	2,165
국 비	1,700	400		1,300
시 도 비
시군구비	1,700	600	1,100
지 방 채
민간자본
기 타	865			865

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 부지매입 완료: 2016. 11. 16.

○ 설계 완료: 2017. 7. 19.

○ 공사 착공: 2017. 11. 16.

□ 향후계획

○ 공사 준공 예정 : 2018. 9.

○ 개관 예정 : 2018. 10.

□ 사업변경 내역

○ 매각 금액 이견으로 신축 부지 변경 : 2016. 8.

- 당초 : 해남군 해남읍 구교리 376-1 / 2층

- 변경 : 해남군 해남읍 구교리 347, 347-1번지 / 3층

○ 건립 사업비 변경: 2017. 8. 31.

- 당초: 5,700백만원(설계비 184, 건축비 4,070, 시설부대비 11, 토지매입비        1,000, 비품구입비 435)

- 변경: 4,265백만원(설계비 184, 건축비 4,070, 시설부대비 11)

- 사유: 토지매입비 및 비품구입비 보조금 산정 제외(보조금 관리에 관한 법률        시행령 제4조)

사업명

해남군 청사 이전

담당자

재무과 강아영(☎530-5276)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해남군 청사 건물은 50년된 노후 건물(1968년 건축)로 2014년 2월 건물 안전진단 결과 D등급 판정 및 행정수요에 비해 청사 협소함

○ 군민편의와 군정업무 수행의 생산성 제고를 위하여 미래지향적인 청사 신축의 필요성 대두

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2020

○ 위 치 : 해남군 해남읍 성내리 54번지 일원

○ 규 모 : 부지면적 21,521㎡, 연면적 16,910㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 48,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	48,300	5,979	6,509	3,419	32,393
국 비
시 도 비
시군구비	48,300	5,979	6,509	3,419	32,393
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 29%)

○ 2016 - 2018 부지매입

○ 2018. 4. 기본 및 실시설계 착수

□ 향후계획

○ 2018. 12. 기본 및 실시설계 납품

○ 2019.  3. 공사 착공

○ 2020. 12. 공사 준공

사업명

소각시설 대보수 사업

담당자

환경교통과 이승철(☎530-5769)

□ 사업목적 및 필요성

○ 한국환경공단기술진단 결과 대기오염물질 배출허용 및 소각 바닥재

강열감량 기준초과로 검증된 소각 방식으로 전면 대보수 추진

○ 소각시설의 노후화로 인한 효율저하로 유지관리 비용 과다 소요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 - 2018

○ 위 치 : 해남군 해남읍 호교길 73-265

○ 규 모 : 소각시설 25톤/일(스토커식) 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,370백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	13,370	318	2,901	10,151
국 비	1,935	95	1,741	99
시 도 비
시군구비	11,435	223	1,160	10,052
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 건설공사 추진 중 : 3층 철근콘크리트 공사

□ 향후계획

○ 2018.11 시운전 및 검사신청

○ 2018.12 공사 준공 및 정상가동

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

해남 국화향연

담당자

농촌지도과 백승현(☎530-3827)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해남 군민들의 정서 함양 및 행복지수

○ 생산적인 문화환경 조성과 지역행사에 능동적 참여 유도

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 10. ~ 2018. 12.

○ 위 치 : 해남군 해남읍 군청길 4

○ 규 모 : 13종, 16,702점

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 853백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	853		287	276	290
국 비
시 도 비
시군구비	853		287	276	290
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

○ 국화향연 전시작품 국화 묘 생산 및 조형물 제작 계획 수립: 2017.10.1.

○ 국화 조형물 시·군간 상호 교환 협의: 2017. 12. 26.

○ 해남 국화향연 예산 집행계획 수립: 2018. 1. 2.

○ 국화 전시작품 정식 및 관리: 2017. 10.~ 현재

□ 향후계획

○ 국화향연과 해남예술제 연계 추진 협의: 2018. 8.(관계기관: 문화관광과)

- 군민광장 및 문화예술회관 사용 협조

○ 2018년 국화향연 세부계획 수립: 2018. 9.

○ 제9회 해남 국화향연 추진: 2018. 10. 26.~11. 25.(31일간)

사업명

옥천 도림~용심간

농어촌도로 확·포장공사

담당자

안전건설과 김영환(☎530-5489)

□ 사업목적 및 필요성

○ 원활한 농수산물 운송로 구축 및 도로정비를 통한 주민 불편해소와

교통사고 예방

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 9. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 해남군 옥천면 백호리, 용동리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L= 2.60km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,500		60	500	2,940
국 비
시 도 비
시군구비	3,500		60	500	2,940
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 실시설계 및 행정절차 이행

□ 향후계획

○ 사업발주 및 착공

○ 토지보상 및 표토제거

사업명

해남 황산면사무소 청사 신축

담당자

재무과  강아영(☎530-5276)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현재의 면청사는 1971년 건축된 노후건물로 2015. 6. 건물안전진단결과 D등급 판정

○ 면민들의 편의시설 확충과 면 업무 수행의 생산성 제고를 위하여 새롭게 청사 신축의 필요성 대두

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2019

○ 위 치 : 해남군 황산면 우항리 422-4외 6

○ 규 모 : 부지면적 10,639㎡ / 예상연면적 900㎡(지상 2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,000				3,000
국 비
시 도 비
시군구비	3,000				3,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○  편입토지 매입 : 2018. 2.

□ 향후계획

○  기본 및 실시설계 : 2018. 9. - 2019. 1.

○  계약심사 : 2019. 2.

○  공사착공 : 2019. 3.

○  공사착공 : 2019. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음.

사업명

해남읍터미널 인근 공영주차장 조성

담당자

환경교통과 김하연(☎530-5367)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해남읍 교통량이 많은 터미널 상가주변에 가능한 임대주차장 및

나대지를 매입하여 공영주차장을 조성함으로써 교통소통원활화 및       주차편의성 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 9. ~ 2018. 12.

○ 위 치 : 해남군 해남읍 해리 453-3번지 외 2필지

○ 규 모 : 주차장 시설 1개소(2,915㎡/ 100면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,900	-	1,798	1,102	-
국 비
시 도 비
시군구비	2,900	-	1,798	1,102	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 토지매입완료

○ 주차장 부지 건축물 철거 실시설계 용역완료: 2018. 8.

□ 향후계획

○ 건축물 철거 실시: 2018. 9. ~ 10.

○ 주차장 조성 실시설계 및 조성: 2018. 10. ~ 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

땅끝관광지(송호지구) 주차장

조성 토지매입

담당자

문화관광과 박 철(☎530-5853)

□ 사업목적 및 필요성

○ 땅끝관광지 지정 및 조성계획에 따라 편입토지를 매입하여 개발사업 적기

추진

○ 땅끝관광지 송호지구 주차장 및 이벤트광장 사업부지 소유자와 매입 협의에

따라 부지확보 후 사업 추진

□ 사업개요

○ 기 간 :  2017 ~ 2018

○ 위 치 : 해남군 송지면 송호리 1041번지 외 13필지

○ 규 모 : 14필지 18,479㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,400		2,241	159
국 비
시 도 비
시군구비	2,400		2,241	159
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 88%)

○ 편입토지 보상 협의 : 14필지 18,479㎡

- 보상 협의: 11필지 16,178㎡, 미협의 : 3필지 2,301㎡

□ 향후계획

○ 미협의 편입토지 재감정 평가 및 보상 협의 : 2018. 8.

○ 미협의 편입토지(1필지 267㎡) 토지수용절차 진행 : 2018. 8. ~

사업명

송지 학가 지방어항 정비사업

담당자

해양수산과 천일준(☎530-5419)

□ 사업목적 및 필요성

○ 송지 학가 지방어항 정비로 수산업 기반시설 확충 및 수산경쟁력 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2021

○ 위 치 : 해남군 송지면 학가항

○ 규 모 : 방파제 및 물양장 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	9,000	87	704	1,000	7,209
국 비	7,200	70	563	800	5,767
시 도 비
시군구비	1,800	17	141	200	1,442
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 총괄 및 1차분 사업발주

○ 부지 조성을 위한 사석 및 피복석 투하

□ 향후계획

○ 물양장 및 방파제 설치

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

군⇒읍면⇒마을전화방송시스템구축

담당자

총무과 박영우(☎530-5399)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군민을 위한 신속 정확한 정보제공으로 한차원 높은 행정 서비스 지원

○ 각종 재난⋅재해 발생 시 신속한 상황전파로 피해 극소화

○ 시간과 장소에 구애됨이 없이 실시간 음성정보를 전달, 각종 농사       정보 제공으로 군민 소득증대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 9. ~ 2017. 12.

○ 위 치 : 해남군 512개 마을

○ 규 모 : 전화방송시스템 1식(통합방송시스템 및 수신단말기)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,005백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
시군구비	2,005		2,005	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 본청 및 읍면, 마을 방송시스템 설치 완료

- 본청 및 읍면 동보시스템 서버 15대

- 마을회관 방송수신기 512대

□ 향후계획

○ 도-시군-읍면-마을간 방송 연계 구축으로 신속한 행정 처리 및

정보전달 체계 구축

사업명

신명A~5일시장(1주차장)간

도시계획도로 개설공사

담당자

지역개발과 윤찬하(☎530-5357)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전통시장 이용객들의 교통편의 증진 및 보행자 안전성 확보로 해남 5일       시장 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2018

○ 위 치 : 해남군 해남읍 남외리 일원

○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=511m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	1,300		1,200	100
국 비
시 도 비
시군구비	1,300		1,200	100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 2017. 5. 15. : 실시설계용역 준공

○ 2017. 9. 22. : 시설공사 착공

□ 향후계획

○ 2018. 7. 30. : 시설공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음