109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 해남군에서 2020년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후
울돌목 회오리바다 관광명소화	5,000	768	2,107	2,125	-	2021년	2019년	50%
해남군 청사신축	68,765	22,103	20,689	20,973	-	2021년	2015년	70%
황산면사무소 신축	2,798	1,239	1,559	-	-	2020년	2017년	100%
현산 두모항 어촌뉴딜 300사업	6980	2443	3141	1396	-	2021년	2018년	80%
화산 구성항 어촌뉴딜 300사업	7985	2794	3593	1598	-	2021년	2018년	80%
수산식품 거점단지 조성사업	15000	124	1690	13186	-	2021년	2019년	75%
해남로컬푸드 직매장 건립	5,310	2295	669	2346	-	2021년	2019년	90%
해남읍 매일시장 현대화시설 조성	16,400	8,116	919	7,355	-	2,022년	2019년	75%
농산물안전성 분석센터 신축	3113	3,022	3,113	-	-	2020년	2019년	100%
황산 성산항 어촌뉴딜300사업	8,277	-	2,161	3,311	2,805	2022년	2020년	26%
송지 갈산항 어촌뉴딜300사업	7,680	-	2,012	3,072	2,596	2022년	2020년	25%
북평 남성항 어촌뉴딜300사업	8,773	-	2,285	3,509	2,979	2022년	2020년	25%
해남읍 남동 공영주차장 조성사업	2,140	-	1,908	78	-	2021년	2020년	100%
제2스포츠타운 조성	18,000	3,900	2,477	2,423	13,100	2023년	2020년	15%
두륜산 힐링 워터파크 조성	5,900	-	-	1,000	4,900	2023년	2020년	10%
땅끝 꿈길랜드 조성	5,000	-	-	200	4,800	2023년	2020년	10%
수출전문 스마트팜 온실신축	3,364	-	2,691	673	-	2021년	2020년	77%
해남 웰빙고구마 종합가공타운 조성	3,000	-	-	400	2,600	2024년	2020년	10%
과학영농 종합시설 기반구축	2.200	-	1.080	1,120	-	2021년	2020년	30%
공룡화석지 워터파크 조성	2,895	-	95	2800	-	2021년	2020년	97%
해남읍 5일시장 주차환경개선사업	3,000	-	-	3000	-	2022년	2020년	30%
두륜산권역 길정원 조성	5,000	376	20	1,900	2,724	2023년	2020년	5%
스마트 원격검침 시스템 구축	7,900	-	-	1,168	6,742	2025년	2020년	20%
세계의 땅끝공원 조성	4,900	3	193	2,964	1,740	2022년	2020년	40%
땅끝관광지 조성 토지매입	5,287	-	-	765	4,522	2023년	2020년	1%
귀농산어촌 체류형지원센터 조성	3,000	-	-	902	2,098	2022년	2020년	10%
해남군민광장 조성	5,800	100	100	2,700	3,000	2021년	2020년	10%
과학영농 실증시험 기반시설 확충	3.000	-	-	2,200	800	2022년	2020년	20%
전라남도 농업경영인대회	260	-	-	260	-	2021년	2020년	30%
해남광장 부지매입	4,830	-	-	2,800	-	2022년	2020년	10%
해남 복합문화체육센터 건립	11,100	3,030	-	3,630	7,470	2023년	2020년	10%
땅끝 해남을 리폼하다	10,000	-	-	1,000	9,000	2023년	2020년	3%

‣ 대상사업 : 투자심사를 통과(적정, 조건부)하여 2020년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황 : 별첨 9

10-2. 지방채 발행사업

우리 해남군에서 '20년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 해남군에서 '20년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.

별첨 9	개별 투자심사사업 추진 현황

사업명

울돌목 회오리바다 관광명소화

담당자

관광실 김박설(☎530-5329)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국내 수역에서 조류 속도가 제일 빠르고 유일하게 회오리(소용돌이) 물살이       발생하는 울돌목 협수로의 역사·생태 관광 활성화

○ 체험·역사탐방 등 관광 트렌드에 부합하는 관광지 정비로 지역경쟁력 제고 및       복합관광 문화 향유기반 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. ~ 2021.

○ 위 치 : 해남군 문내면 학동리 1021번지 일원(우수영관광지 내)

○ 규 모 : 한눈역사조망소 정비 1식, 이색대첩비 제작 및 설치 1식

스카이워크 조성 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원(국비 1,080 군비 3,920)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,000	768	2,107	2,125
국 비	1,080	461	619	-
시 도 비
시군구비	3,920	307	1,488	2,125
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 회오리바다 체험시설(스카이워크) 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2019. 4.

○ 한눈역사조망소 정비 준공 : 2019. 10.

○ 이색대첩비 제작 및 설치 준공 : 2019. 11.

○ 회오리바다 체험시설(스카이워크) 기본 및 실시설계 용역 완료 : 2020. 6.

○ 회오리바다 체험시설(스카이워크) 계약심사: 2020. 6.

○ 회오리바다 체험시설(스카이워크) 공사 착수: 2020. 6.

□ 향후계획

○ 회오리바다 체험시설(스카이워크) 공사 준공: 2021. 8.

□ 사업변경 내역

○ 회오리바다 체험시설(스카이워크) 실시설계 과정에 사업비 증액

○ 회오리바다 체험시설(스카이워크) 공사 설계변경에 따른 사업비 감액

사업명

해남군 청사 신축

담당자

재무과 강석수(☎530-5274)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해남군 청사 건물은 52년된 노후 건물(1968년 건축)로 2014년 2월 건물

안전진단 결과 D등급 판정 및 행정수요에 비해 청사 협소함

○ 군민편의와 군정업무 수행의 생산성 제고를 위하여 미래지향적인 청사

신축의 필요성 대두

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2021

○ 위 치 : 해남군 해남읍 성내리 54번지 일원

○ 규 모 : 부지면적 21,521㎡, 연면적 18,601㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  68,765백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	68,765	22,103	20,689	25,973
국 비
시 도 비
시군구비	68,765	22,103	20689	25,973
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2016 ∼ 2018 부지매입 및 지장물 철거

○ 2019. 3. 기본 및 실시설계 완료

○ 2019. 6. 청사 신축공사 착공

○ 2020. 10. 골조공사 완료

□ 향후계획

○ 2021. 1. ~ 6. 내·외부 마감공사

○ 2021. 7. 공사 준공

□ 사업변경 내역

구 분	사업규모	총사업비	사업기간	비고
당 초	16,910㎡	48,300백만원	2020년	보상비 및 물가상승률
현 재	18,601㎡	68,765백만원	2021년

사업명

해남 황산면사무소 신축

담당자

재무과 박수현(☎530-5260)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현재의 면청사는 1971년 건축된 노후건물로 2015. 6. 건물안전진단결과 D등급 판정

○ 면민들의 편의시설 확충과 면 업무 수행의 생산성 제고를 위하여 새롭게 청사 신축의 필요성 대두

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2020

○ 위 치 : 해남군 황산면 우항리 422-4외 6

○ 규 모 : 부지면적 10,663㎡ / 연면적 959.6㎡(지상 2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,798백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,798	1,239	1,559
국 비
시 도 비
시군구비	2,798	1,239	1,559
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○  편입토지 매입 : 2018. 2.

○  기본 및 실시설계 완료 : 2019. 4.

○  공사착공 : 2019. 6.

○  공사준공 : 2020. 6.

사업명

현산 두모항 어촌뉴딜 300사업

담당자

해양수산과 최윤호(☎530-5418)

□ 사업목적 및 필요성

○ 자원을 활용한 콘텐츠 개발로 마을의 미래 활성화를 위한 동력 마련

○ 마을 내 어항 정비와 경관 개선을 통한 주민의 삶의 질 개선 및 방문객 만족도 제고

○ 재난 및 재해 대비 안전한 어항 조성 및 경쟁력 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1. ~2021. 12.

○ 위 치 : 전라남도 해남군 현산면 두모리 일원

○ 규 모 : 방파제 외 10종

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,980 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	6,980	2,443	3,141	1,396
국 비	4,886	1,710	2,199	977
시 도 비	628	220	282	126
시군구비	1,466	513	660	293
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  80 %)

○ 기본 및 실시설계 완료 : 2020. 4.

○ SOC사업 추진 : 2021. 8.

□ 향후계획

○ 건축공사 추진 : 2021. 9.

○ 전체 공정 준공 : 2021. 12.

사업명

화산 구성항 어촌뉴딜 300사업

담당자

해양수산과 최윤호(☎530-5418)

□ 사업목적 및 필요성

○ 자원을 활용한 콘텐츠 개발로 마을의 미래 활성화를 위한 동력 마련

○ 마을 내 어항 정비와 경관 개선을 통한 주민의 삶의 질 개선 및 방문객 만족도 제고

○ 재난 및 재해 대비 안전한 어항 조성 및 경쟁력 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.

○ 위 치 : 전라남도 해남군 화산면 평호리 일원

○ 규 모 : 물양장 외 9종

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,985백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	7,985	2,794	3,593	1,598
국 비	5,589	1,956	2,515	1,118
시 도 비	718	251	323	144
시군구비	1,678	587	755	336
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  80 %)

○ 기본 및 실시설계 완료 : 2020. 4.

○ SOC사업 추진 : 2021. 8.

□ 향후계획

○ 건축공사 추진 : 2021. 9.

○ 전체 공정 준공 : 2021. 12.

사업명

수산식품 거점단지 조성사업

담당자

해양수산과 박윤희(☎530-5556)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고부가가치 수산식품개발의 연구․유통 및 6차산업 등 수출선도형 거점단지 조성

○ 김, 전복 등 지역자원의 환원 수매를 통해 어가소득 증대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2021

○ 위 치 : 전라남도 해남군 마산면 상등리 1121 외 2필지

○ 규 모 : 연구지원시설, 가공시설, 냉동보관시설

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	15,000	124	1,690	13,186
국 비	7,500	62	845	6,593
시 도 비	-
시군구비	4,500	37	506	3,957
지 방 채	-
민간자본	3,000	25	339	2,636
기 타	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  75%)

○ 기본 및 사업시행계획 승인 : 2019. 4. 5.

○ 기본설계 변경계획 승인요청 : 2019. 12. 26.

○ 기본설계 및 실시설계용역 완료 : 2020. 8. 30.

○ 공사착공 : 2020. 12. 30.

□ 향후계획

○ 공사준공 : 2021. 12. 29.

사업명

해남로컬푸드 직매장 건립

담당자

유통지원과 최승진(☎530-5973)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 농산물의 선순환 체계 구축과 안전한 먹거리의 보편적 가치 실현

○ 농촌형 일자리 창출과 직거래 활성화로 지역경제 활력 증진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 8월 ～ 2021년 8월

○ 위 치 : 해남군 해남읍 구교리 301번지 외 1필지

○ 규 모 : 해남군 로컬푸드 직매장 1개소(연면적: 991㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,310백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,310	2,295	669	2,346
국 비	900	94	669	137
시 도 비
시군구비	4,410	2,201		2,209
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 부지확보 (‘19. 9월)

○ 기본 및 실시설계 완료 (’20. 12월)

○ 직매장 건립공사 착공(‘20. 12월)

○ 직매장 건립공사 준공(‘21. 8월)

□ 향후계획

○ 로컬푸드 직매장 개장(’21. 9월)

사업명

해남읍 매일시장 현대화 시설조성

담당자

경제산업과 최대웅(☎530-5167)

□ 사업목적 및 필요성

○ 매일시장 재건축을 통하여 시장이미지를 개선하고 상권 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간: 2016 ~ 2022

○ 위 치: 해남군 해남읍 읍내리 50번지 일원

○ 규 모: 지상 3층(부지 3,365㎡/ 연면적 1,710.41㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 16,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	16,400	8,116	929	7,355	-
국 비	2,940	2,938	-	2	-
시 도 비	1,680	-	-	1680	-
시군구비	11,780	5,178	929	5673	-
지 방 채		-	-	-	-
민간자본		-	-	-	-
기 타		-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 75%)

○ 매일시장 공설화 완료: ’15. 12.

○ 군관리계획시설(시장) 변경 결정: ’17. 1.

○ 기본계획 및 실시설계 용역 추진: ’17. 8.

○ 철거부지 상인 이전 협의 및 보상비 지급: ’20. 3.

○ 임시시장 개설: ’20. 6.

○ 철거공사 추진: ’20. 6. ~ ’21. 2.

○ 전라남도 및 해남군 계약심사: ’21. 8.

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계 완료: ’21. 8.

○ 사업 착공: ’21. 9.

○ 운영 계획 수립 및 입주자 모집: ’21. 11.

○ 상인 이전 및 하천변 가설점포 철거: ’22. 3.

○ 사업완료 및 매일시장 개장: ’22. 3.

사업명

농산물안전성분석센터신축

담당자

농업기술센터 김다정(☎531-3864)

□ 사업목적 및 필요성

○ PLS 전면시행에 따른 농산물 안전성 검사업무 수행

○ 로컬푸드, 공공급식 농산물안전성분석으로 신뢰도 제고 및 안전농산물 생산기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 해남읍 땅끝대로 45-56(용정리 25-1)

○ 규 모 : 1동(3층, 970㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,113백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,113
국 비	1,500	1,492	1,500
시 도 비
시군구비	1,613	1,530	1,613
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 기본 및 실시설계                                            ’20. 2.

○ 설계심사(전라남도)                                           ’20. 4.

○ 공사 계약 및 착공                                           ‘20. 6.

○ 신축공사                                           ’20. 7. ~ ‘20. 12.

○ 준공                                                        ‘20. 12.

사업명

황산 성산항 어촌뉴딜 300사업

담당자

해양수산과 최윤호(☎530-5418)

□ 사업목적 및 필요성

○ 자원을 활용한 콘텐츠 개발로 마을의 미래 활성화를 위한 동력 마련

○ 마을 내 어항 정비와 경관 개선을 통한 주민의 삶의 질 개선 및 방문객 만족도 제고

○ 재난 및 재해 대비 안전한 어항 조성 및 경쟁력 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~2022. 12.

○ 위 치 : 전라남도 해남군 황산면 성산리 성산항 일원

○ 규 모 : 다목적 방파제 외 10종

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,277백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	8,277		2,161	3,311	2,805
국 비	5,794		1,513	2,317	1,964
시 도 비	745		194	299	252
시군구비	1,738		454	695	589
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  26 %)

○ 기본 및 실시설계 추진 : 2021. 8.

○ SOC사업 착수 : 2021. 8.

□ 향후계획

○ 공통사업 등 우선 준공 : 2021. 12.

○ 전체 공정 준공 : 2022. 12.

사업명

송지 갈산항 어촌뉴딜 300사업

담당자

해양수산과 최윤호(☎530-5418)

□ 사업목적 및 필요성

○ 자원을 활용한 콘텐츠 개발로 마을의 미래 활성화를 위한 동력 마련

○ 마을 내 어항 정비와 경관 개선을 통한 주민의 삶의 질 개선 및 방문객 만족도 제고

○ 재난 및 재해 대비 안전한 어항 조성 및 경쟁력 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~2022. 12.

○ 위 치 : 전라남도 해남군 송지면 송호리 갈산항 일원

○ 규 모 : 방파제 연장 외 10종

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,680백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	7,680		2,012	3,072	2,596
국 비	5,376		1,408	2,151	1,817
시 도 비	691		181	276	234
시군구비	1,613		423	645	545
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  26 %)

○ 기본 및 실시설계 추진 : 2021. 8.

○ SOC사업 착수 : 2021. 8.

□ 향후계획

○ 공통사업 등 우선 준공 : 2021. 12.

○ 전체 공정 준공 : 2022. 12.

사업명

북평 남성항 어촌뉴딜 300사업

담당자

해양수산과 최윤호(☎530-5418)

□ 사업목적 및 필요성

○ 자원을 활용한 콘텐츠 개발로 마을의 미래 활성화를 위한 동력 마련

○ 마을 내 어항 정비와 경관 개선을 통한 주민의 삶의 질 개선 및 방문객 만족도 제고

○ 재난 및 재해 대비 안전한 어항 조성 및 경쟁력 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~2022. 12.

○ 위 치 : 전라남도 해남군 북평면 영전리 남성항 일원

○ 규 모 : 여객선 접안시설 외 13종

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,773백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	8,773		2,285	3,509	2,979
국 비	6,141		1,600	2,456	2,085
시 도 비	789		205	316	268
시군구비	1,843		480	737	626
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  26 %)

○ 기본 및 실시설계 추진 : 2021. 8.

○ SOC사업 착수 : 2021. 8.

□ 향후계획

○ 공통사업 등 우선 준공 : 2021. 12.

○ 전체 공정 준공 : 2022. 12.

사업명

해남읍 남동 공영주차장 조성사업

담당자

환경교통과 김경균(☎530-5645)

□ 사업목적 및 필요성

○ 매일시장 주변 상가 밀집지역으로 주차 공간이 부족에 따른 주민불편 해소

및 신규 주차장 조성을 통해 지역 상권 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2021. 2.

○ 위 치 : 해남군 해남읍 남동리 62번지 일원

○ 규 모 : 주차장 조성 843㎡, 주차면수 27면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,986백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	1,986	-	1,907	78	-
국 비
시 도 비
시군구비	1,986	-	1,907	78	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 설계용역 착수: 2020. 8.

○ 공사 착공: 2020. 10.

○ 공사 준공: 2021. 1.

사업명

제2스포츠타운 조성

담당자

스포츠사업단 임병태(☎530-5516)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역경제 활성화를 위한 동계 전지훈련 유치 확대 및 지자체간 스포츠

마케팅 경쟁이 격화되고 있어 새로운 인프라 조성 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2023년

○ 위 치 : 해남군 삼산면 평활리 1223-1번지 일원

○ 규 모 : 113,506㎡(축구장 2면, 야구장 2면 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	18,000	0	3,900	1,000	13,100
국 비	4,230	0	0	300	3,930
시 도 비
시군구비	13,770	0	3,900	700	9,170
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  15%)

○ 사유지 토지 매입 98% 완료

○ 기본 및 실시설계 추진 중

□ 향후계획

○ 공사 착수: 2022. 3.

○ 공사 준공: 2023. 12.

사업명

두륜산 산린이 바이러스 프리존 조성

담당자

관광실 김박설(530-5329)

□ 사업목적 및 필요성

○ 두륜산도립공원과 유네스코 세계유산으로 등재된 대흥사를 간직한 두륜산 권역의 노후화와 체험 놀이시설 부재로 침체된 관광지를 활성화

□ 사업개요

ㅇ 위    치 : 전남 해남군 삼산면 구림리 138-19번지 일원

ㅇ 개발면적 : 15,299㎡

ㅇ 사업기간 : 2021 ~ 2023

ㅇ 주요시설

- 향후 추진계획시설

· 물놀이 체험장, 풍욕장

· 체험형 생태 흙 놀이터, 그물놀이터, 각 쉼터

· 주차장 조성, 현황 도로 확포장

· 관리실 1동(99㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원(균특 2,500, 군비 2,500)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,000	-	-	1,000	4,900
국 비
시 도 비	2,500	-	-	500	2,450
시군구비	2,500	-	-	500	2,450
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

ㅇ 사업부지 확보                           : '19.  9.

ㅇ 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역       : '19. 10.

ㅇ 지방재정 투자심사                        : '20. 8.

ㅇ 기본 및 실시설계 용역 계약심사 및 발주   : '21. 4.

□ 향후계획

ㅇ 기본 및 실시설계 용역 착수               : '21.  5. ~ '21.  11.

ㅇ 주민설명회 등 의견수렴                   : '21.  8.

ㅇ 산린이 바이러스 프리존 공사 착공(1차분)   : '21. 10.

□ 사업변경 내역

○ 사업명칭 및 세부 도입시설 일부 변경

사업명

땅끝 꿈길랜드 조성

담당자

관광실 임지수(530-5853)

□ 사업목적 및 필요성

○ 땅끝관광지 시설물 등이 대부분 노후화가 심각하여 이미지 개선 및 관광지 조성을 위한 산책로(보행로) 및 주변정비를 통한 열린 관광지 조성

□ 사업개요

ㅇ 위    치 : 전남 해남군 송지면 송호리 산 44-5번지 일원

ㅇ 사업기간 : 2021 ~ 2023

ㅇ 주요시설

- 향후 추진계획시설

· 공원정비(조경시설물 설치: 벤치, 앉음벽 등, 조경수 식재 등)

· 산책로 정비(노후데크 난간교체)

· 무장애 데크로드 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원(균특 2,500, 군비 2,500)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,000	-	-	200	4,800
국 비
시 도 비	2,500	-	-	100	2,400
시군구비	2,500	-	-	100	2,400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

ㅇ 기본계획 수립완료                          : '19.  7.

ㅇ 지방재정 투자심사                          : '20. 8.

ㅇ `21년 관광자원개발사업 사업계획서 제출     : `20. 11. 19.

ㅇ 기본 및 실시설계 용역 발주                 : '21. 4. 12.

ㅇ 기본 및 실시설계 용역 착수                 : '21. 5. 27.

□ 향후계획

ㅇ 기본 및 실시설계 용역                    : '21.  5. ~ '21.  11.

ㅇ 주민설명회 등 의견수렴                   : '21.  8.

ㅇ 땅끝 꿈길랜드 조성사업 착공(1차분)        : '22.  2.

사업명

수출전문 스마트팜 온실신축

담당자

농정과 박순정(☎530-5384)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기후변화에 대응 미래농업에 대한 성공적 기반 구축을 위해 첨단농업단지       조성, 고부가가치 영농선도

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020~2021.

○ 위 치 : 해남군 산이면 덕호리 1028 일대

○ 규 모 : 20,124㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,364백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,364	-	2,691.2	672.8	-
국 비	673	-	673	-	-
시 도 비	201.84	-	201.84	-	-
시군구비	1,143.56	-	1,143.56	-	-
지 방 채		-	-	-	-
민간자본	672.8	-	672.8	-	-
기 타	672.8	-	-	672.8	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  77%)

○ 한국농어촌공사 해남완도지사 업무 위수탁 협약       '20.12.

○ 건축(토목) 및 전기공사 시행업체 입찰               '21. 3.

○ 건축(토목)공사 착공                                '21. 4.

○ 자재반입, 주기둥 설치                               '21. 5.

○ 기둥 트러스, 서가래 설치 및 천정공사                '21. 6~8.

□ 향후계획

○ 양액시스템 및 보온커튼 등 내부시설 설치            '21. 8.

○ 시운전 및 준공검사                                 '21. 9.

사업명

해남 웰빙고구마 종합가공타운 조성

담당자

유통지원과 김정완(☎530-5437)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농산물 생산, 가공, 유통, 관광 등 1, 2, 3차 산업이 집적된 지역을 농촌

융복합지구로 지정하여 전후방 산업이 융복합된 지역특화산업의 클러스터로 육성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. ~ 2024.

○ 위 치 : 해남군 화산면 방축리 489-1

○ 규 모 : 저온저장시설 1동(660㎡), 고구마 가공시설 1동(660㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,000	0	0	400	2600
국 비	1,500	0	0	200	1300
시 도 비	450	0	0	60	390
시군구비	600	0	0	140	460
지 방 채
민간자본	450	0	0	0	450
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10 %)

○ 2021년 국비, 도비 교부결정 및 송금(2021. 6. 21.) / 진도율 10%

□ 향후계획

○ 농촌융복합산업지구조성사업 세부계획 수립(2021. 7.)

○ 농촌융복합산업지구조성사업 최종 승인(2021. 7.)

사업명

과학영농 종합시설 기반구축

담당자

농업기술센터 성진주(3822)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농업인의 영농애로 사항을 해결할 수 있는 상담 기능 강화 및 영농 정보 제공·공유할 수 있는 공간 마련

○ 농기계 안전 활용 및 농기계 사고로부터 사용자 보호를 위해 농기계 작동·안전 교육장 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2021.

○ 위 치 : 해남군 해남읍 용정리 303-1 외 6필지

○ 규 모 : 1동(지상 2층) / 497.78㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,200	0	1,100	1,100
국 비	480			480
시 도 비
시군구비	1,720		1,100	620
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 추진계획 수립: ’20. 1.

○ 공유재산심의회 심의 의결: ’20. 2.

○ 투자심사위원회 심의 의결: ’20. 8.

○ 사업부지 매입: ’20. 9. ~ ’20. 12.

○ 신축 공사 기본 및 실시설계용역 추진: ’20. 10. ~ ’21. 5.

○ 장애인없는 생활환경(BF) 예비인증 획득:  ’21. 5.

□ 향후계획

○ 전라남도 계약 시맛 추진: ’21. 6.

○ 공사착공 및 준공: ’21. 7. ~ 12.

사업명

공룡화석지 워터파크 조성

담당자

공룡화석지사업소 김성진(☎530-5948)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공룡화석지를 찾는 관람객의 새로운 트랜드를 반영한 워터파크를

조성하여 가족형 체험공간으로서의 공룡박물관 가치 재창출

○ 서남해안권 박물관·미술관 탐방객에게 다양한 볼거리·체험거리 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : ’21. 3. 2. ~ 8. 30.

○ 위 치 : 전남 해남군 황산면 우항리 191번지 일원

○ 규 모 : A= 1,750㎡ / 물놀이 체험 시설 3종

[공룡슬라이드 2종(H=8m, 수조 70㎡), 공룡풀장 450㎡, 바닥분수 20㎡]

- 부속건물 1동 419㎡

○ 사업비 : 2,900백만원(특교 800백만원 / 군비 2,100백만원)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,900
국 비
시 도 비
시군구비		-	95	2,000
지 방 채
민간자본
기 타(특교)				800

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 97%)

○ 용역착수: ’20. 6. 3.

○ 투융자심사: ’20. 8. 10.

○ 문화재위원 자문: ’20. 10. ~ 11.

○ 설계용역완료: ’20. 12. 16.

○ 계약심사: ’21.  1. 25.

○ 공사착공: ’21.  3.  2.

□ 향후계획

○ 행정사항(건축물사용승인 및 유원놀이시설업 허가신청등) 이행

○ 준공(예정) : ’21. 8. 30.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업비 : 당초 2,500백만원 → 변경 2,900백만원

- 공룡화석지 이미지에 맞추어 부속건물 트릭아트 및 공룡형상화 추진

- 장애인을 위한 엘리베이터 설치, 관람객 편의시설 확보 등

사업명

해남읍 5일시장 주차환경개선사업

담당자

경제산업과 최대웅(☎530-5167)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주차 공간 확보로 시장주변 교통 혼잡과 시장이용객 불편 해소 및 시장이용객       편의성 증진과 시장 활성화를 통한 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간: 2021 ~ 2022

○ 위 치: 해남군 해남읍 남외리 113-1번지

○ 규 모: 2층 3단(연면적 2,600㎡/ 140대)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,000	-	-	3,000	-
국 비	2,100	-	-	2,100	-
시 도 비		-	-	-	-
시군구비	900	-	-	900	-
지 방 채		-	-	-	-
민간자본		-	-	-	-
기 타		-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 30%)

○ 주차환경 개선사업 공모사업 선정: ’20. 9.

○ 기본 및 실시설계 용역 추진: ’21. 1.

※ 주민 설명회 개최: 2회(4. 16./ 5. 21.)

○ 전라남도 경관심의: ’21. 8.

○ 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 심의: ’21. 8.

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계 완료: ’21. 9.

○ 사업 착공: ’21. 10.

○ 사업 완료: ’22. 1.

※ 사업완료시 시장 번영회 위탁관리(무료주차장 운영)

사업명

두륜산권역 길 정원 조성

담당자

산림녹지과 한진규(☎530-5268)

□ 사업목적 및 필요성

○ 천년고찰 대흥사 하부에 지역자원과 연계한 쉼과 재미가 있는 길 정원

조성으로 두륜산권역 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2023년

○ 위 치 : 해남군 삼산면 구림리 산8-1번지 외 19필지(대흥사 일원)

○ 규 모 : L=2.1㎞, 약 10ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,000	376	20	1,900	2,724
국 비	2,500	188	10	950	1,362
시 도 비	250	19	1	95	136
시군구비	2,250	169	9	855	1,226
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ (‘20.  7. 14.) 기본구상 용역 완료

○ (‘20. 10. 22.) 도 투자심사 승인-사업비 120억원 / 조건부 승인

○ (‘21.  2. 25.) 토지소유자(대흥사) 사업내용 변경요청

○ (‘21.  6. 25.) 기본 및 실시설계 용역 착수

□ 향후계획

○ (‘21.  6. ~ ’21. 11.) 기본 및 실시설계 용역

○ (‘21. 11. ~ ’21. 12.) 계약심사 및 공사 발주

○ (‘22.  1. ~ ’23. 12.) 사업 착수 및 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 토지소유자의 사업내용 변경 요청에 따른 총사업비 축소

- 12,000백만원 → 5,000백만원

사업명

스마트 원격검침 시스템 구축

담당자

상하수도사업소 박혜정 (☎531-3655)

□ 사업목적 및 필요성

○ 정확한 검침 데이터를 기반으로 요금 부과 민원 발생 차단 및 가정급수       수량 체계적 관리 및 누수 조기 발견을 통한 유수율 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 1월 ~ 2025년 12월(5년)

○ 위 치 : 해남군 일대 광역. 지방 상수도 보급 지역

○ 규 모 : 디지털 계량기 및 원격검침 단말기 25,000전

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계
국 비					1,078
시 도 비
시군구비				1,168	5,664
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20% )

○원격검침 시스템 서버 구축 관련 발주 의뢰 및 조달청 입찰 공고 진행 중

○디지털 수도미터기 구매 설치 발주 의뢰 (□21. 5.)

□ 향후계획

○원격검침 시스템 서버 구축 완료 추진 ('21. 10.)

○디지털 수도미터기 및 단말기 구축 완료 추진 ('21. 10.)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업비 당초: 7,900백만원/ 현재: 7,910백만원

사업명

세계의 땅끝공원 조성

담당자

관광실 임지수(530-5853)

□ 사업목적 및 필요성

○땅끝을 주제로 특수성 있는 세계6대륙의 규모있는 공원을 조성하여 관광객

에게 지속가능하고 다양한 관광콘텐츠 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 전남 해남군 송지면 송호리 1153번지 일원

○ 개발면적 : 13,000㎡

○ 사업기간 : 2019 ~ 2022

○ 주요내용 : 세계 6대륙 땅끝정원, 세계 6대륙 조형물, 전망광장, 산책로,

휴게쉼터, 야간경관, 주차장 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,900백만원(균특 200, 도비 583, 군비 4,117)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,900	3	193	2,964	1,740
국 비	200	3	116	81	-
시 도 비	583	-	-	583	-
시군구비	4,117	-	77	2,300	1,740
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

ㅇ 기본계획 수립 용역완료                                  :'18. 6.

ㅇ 사업부지 확보                                           :'19.  9.

ㅇ 기본 및 실시설계 용역착수                               :'20. 12.

ㅇ 실시설계(안) 주민설명회                                  :‘20. 7. 17.

ㅇ 해남군 제5회 경관심의                                   :‘20. 8. 28.

ㅇ 세계의 땅끝공원 조성사업 변경승인(전라남도)              :‘20. 9. 14.

ㅇ 세계의 땅끝공원 조성사업 변경(군수결재)                  :‘20. 10. 12.

ㅇ 지방재정 투자심사                                       :‘20. 11. 4.

ㅇ 땅끝관광지 조성계획 변경 고시                           :‘20. 11. 16.

ㅇ 세계의 땅끝공원 조성사업 계약심사                       :‘20. 12.

ㅇ 세계의 땅끝공원 조성사업 기본 및 실시설계완료           :‘20. 12.

ㅇ 세계의 땅끝공원 조성사업 경관조명 설치공사 착공         :‘21. 1. 6.

ㅇ 세계의 땅끝공원 조성공사 총괄 및 1차분 착공             :‘21. 3. 11.

ㅇ 세계의 땅끝공원 조성공사 폐기물 처리용역 발주           :‘21. 4. 6.

ㅇ 세계의 땅끝공원 조성공사 2차분 계약                     :‘21. 4. 29.

ㅇ 세계의 땅끝공원 조성공사(총괄 및 1,2차분),폐기물 변경계약   :‘21. 6. 23.

ㅇ 세계의 땅끝공원 조성공사 1차분 준공                     :‘21. 6. 30.

□ 향후계획

ㅇ 조형물 제작설치 기본 및 실시설계 발주                    :‘21. 7.

ㅇ 조형물 제작설치 공사 발주                                :‘21. 10.

ㅇ 조형물 제작설치 및 시설공사(총괄) 준공                    :‘22. 3.

사업명

땅끝관광지 조성 토지매입

담당자

관광실 김진성(☎530-5258)

□ 사업목적 및 필요성

○ 땅끝관광지의 지속가능한 활성화를 위하여 땅끝만의 의미를 부여한 체험

시설 인프라를 구축 및 체류형 관광지 조성을 위한 토지 매입

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2023

○ 위 치 : 전남 해남군 송지면 송호리 1094-2번지 외 23필지

○ 규 모 : 23,761㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,287백만원(군비 5,287)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,287	-	-	765	4,522
국 비
시 도 비
시군구비	5,287	-	-	765	4,522
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1%)

○ 땅끝관광지 체험시설 개발 편입부지 감정평가: ‘21. 1. 14.

○ 땅끝관광지 체험시설 개발 편입부지 감정평가 회보: ‘21. 3. 23.

□ 향후계획

○ 토지 소유자와 매도 협의후 토지매입 추진

□ 사업변경 내역

○ (당초) 총 사업비: 3,560백만원(토지 1,945 지장물 1,611 감정평가 등 4)

○ (변경) 총 사업비: 5,287백만원(토지 3,205 지장물 2,073 등기이전 등 9)

사업명

귀농산어촌 체류형지원센터 조성

담당자

인구정책과 신승훈(☎531-4273)

□ 사업목적 및 필요성

○ 예비 귀농인을 대상으로 일정기간 가족과 함께 체류하면서 농촌이해, 농촌적응, 농업 창업과정 실습 및 교육 체험할 수 있는 지원센터 운영

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2022년

○ 위 치 : 해남군 계곡면 둔주포안길 18(귀농귀촌희망센터)

○ 규 모 : 기존 건물 리모델링(1,046.95㎡), 주택 신축 12동(동당 43㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3000			902	2,098
국 비
시 도 비	1,500			451	1,049
시군구비	1,500			451	1,049
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 설계공모 심사위원회 개최 및 당선작 선정: `21. 5. 20.

○ 기본 및 실시설계 용역 계약: `21. 6. 4.

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계 용역: ‘21. 6. ~ 9.

○ 공사 착공: `21. 11.

○ 공사 준공: `21. 2.

○ 센터 개관 및 운영: `21. 3.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 당초는 신축 계획(도 의견 반영)이었으나, 기 투자된 매몰비용 및 안전진단 결과 C등급(보통)으로 인해 건물 철거의 어려움이 있어 리모델링으로 사업변경

사업명

해남 군민광장 조성

담당자

재무과 김동현(☎530-5613)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해남군 신청사 건립(이전) 예정에 따라 구 청사부지와 천연기념물 수성송을       중심으로 기존 군민광장과 연계한 해남군을 대표하는 광장 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2022년

○ 위 치 : 해남읍 군청길 4 일원

○ 규 모 : 14,000㎡(군청사 철거(2동) 및 광장 편의시설 조성)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,800		100	2,700	3,000
국 비
시 도 비
시군구비	5,800		100	2,700	3,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ ‘20. 2. ~ 11. : 군민광장 조성 타당성 조사 및 기본계획 수립

○ ’21. 11. : 해남군 투자심사

○ ’21. 2. ~ : 기본 및 실시설계 착수(‘21. 9. 완료 예정)

○ ’21. 4. ~ : 해남군 공유재산관리계획 승인

□ 향후계획

○ ‘21. 10. ~ 12. : 구 청사 철거

○ ’22. 2. ~ 6. : 광장(편의시설) 조성

사업명

과학영농 실증시험 기반시설 확충

담당자

농업기술센터 박현경(3893)

□ 사업목적 및 필요성

○ 급변하는 기후변화에 대응하여 새로운 소득작목 발굴을 위한 실증포장 조성 및 농업인을 위한 현장 영농교육장 확보를 위해 기반시설을 확충하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 12.

○ 위 치 : 해남군 삼산면 평활리 일대

○ 규 모 : 약 5㏊

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,000		-	2,200	800
국 비	100			100
시 도 비	1,000			1,000
시군구비	1,900			1,100	800
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 사전절차 이행: ’21. 1. ~ 5.

○ 사업부지 확정: ’21. 6.

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계: ’21. 7. ~ 9.

○ 공사착공 및 준공: ’21. 10. ~ 22. 6.

□ 사업변경 내역

○ 당초

- 사업위치: 해남군 삼산면 평활리 일대

- 사 업 비: 43억원(국비 1, 도비 10, 군비 32)

○ 변경

- 사업위치: 해남군 삼산면 나범리 일대

- 사 업 비: 30억원(국비 1, 도비 10, 군비 19)

- 변경사유: 우리군의『농업연구단지 조성』추진에 따라 농업연구단지 클러스터 조성을 위해 사업부지 변경 및 부지매입비 반납

사업명

제16회 전라남도농업경영인대회

담당자

농업기술센터 김광민(☎531-3832)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국제화 개방화속에서 농업소득 창출과 농업·농촌 회생대책을 강구

○ 미래농업의 비전 제시를 위한 노력과 한농연 전라남도연합회의 단결력 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 8. 12. ~ 8. 14.(3일)

○ 위 치 : 삼산면 대흥사 관광지 일원

○ 규 모 : 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 260백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	260	-	-	260	-
국 비
시 도 비
시군구비	260	-	-	260	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 사업보조금 교부결정: 2021. 4.

○ 행사 운영 대행 용역사 선정 입찰 공고: 2021. 6.

□ 향후계획

○ 행사 대행 용역사 선정 및 협상에 의한 계약: 2021. 7.

○ 행사 준비 및 행사 추진: 2021. 7. ~ 8.

사업명

해남광장 부지매입

담당자

스포츠사업단 임병태(☎530-5516)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해남광장 주차장 주변 혐오시설을 매입하여 해남광장 주차장 확충 및

주변정비 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2022년

○ 위 치 : 해남군 해남읍 신안리 3-1번지 일원

○ 규 모 : 6,302㎡(토지 15필지 및 건물 3동 등 매입)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,800	0	0	0	2,800
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비
시군구비	2,800	0	0	0	2,800
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  10%)

○ 매입토지 및 지장물 감정평가 완료

○ 토지 소유자 매도 협의중

□ 향후계획

○ 매입 예산 편성: 2022. 1.

○ 토지 및 지장물 매입 완료: 2022. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

구분	변경전	변경후
사업 개요	❍ 위치: 해남읍 신안리 3-1번지 일원 ❍ 사업량: 주택 3동 및 토지 20필지 ·건 물: 3동, 841㎡ / 해남 신안 4번지 등 3필지 ·토 지: 20필지, 17,858㎡ / 해남 신안 3-1번지 등 20필지 ❍ 사업비: 4,830백만원	❍ 위치: 해남읍 신안리 3-5번지 일원 ❍ 사업량: 주택 3동 및 토지 15필지 ·건 물: 3동, 841㎡ / 해남 신안 4번지 등 3필지 ·토 지: 15필지, 6,302㎡ / 해남 신안 3-5번지 등 15필지 ❍ 사업비: 2,620백만원

사업명

해남 복합문화체육센터 건립

담당자

스포츠사업단 임병태(☎530-5516)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활권내에서 장애인들이 비장애인과 함께 스포츠를 즐기고 지역사회와       소통하며 문화를 향유 할 수 있는 공간 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2023년

○ 위 치 : 해남군 해남읍 신안리 1-14번지 일원

○ 규 모 : 11,317㎡(센터건립 1동, 수영장, 작은도서관 등 3,015㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	11,100	0	3,030	600	7,470
국 비	5,210	0	0	200	5,010
시 도 비
시군구비	5,890	0	3,030	400	2,460
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  10%)

○ 사유지 토지 매입 60% 완료

○ 기본 및 실시설계 추진 중

□ 향후계획

○ 공사 착수: 2022. 1.

○ 공사 준공: 2023. 12.

사업명

땅끝 해남을 리폼하다

담당자

관광실 김진성(☎530-5258)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산재된 관광자원을 연계하고 노후된 관광지 재생을 통한 체류형 관광

인프라 구축 및 전라남도 블루투어 연계를 통한 가고싶은 관광지로 재도약

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2023(3년간)

○ 위 치 : 전라남도 해남군 송지면 송호리 일원

○ 규 모 : 황토나라테마촌, 오토캠핑장, 땅끝전망대 리모델링 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원(도비 5,000 군비 5,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	10,000	-	-	1,000	9,000
국 비
시 도 비	5,000	-	-	500	4,500
시군구비	5,000	-	-	500	4,500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)

○ 2021년 전남형 지역성장 전략사업 최종 선정: ‘20. 8.

○ 2020년 수시분 전라남도 지방재정 투자심사: ‘20. 10.

○ 전남형 지역성장 전략사업 전문가 자문: ‘20. 9. ~ ’21. 4.

○ 사업계획서 승인 통보: ‘21. 5. 10.

○ 건축기획 수립 용역 발주: ‘21. 6. 9.

□ 향후계획

○ 공공건축심의위원회 심의: ‘21. 7.

○ 기본 및 실시설계용역 발주: ‘21. 9.

○ 기본계획 전남도 대면 협의: ‘21. 10.

○ 기본 및 실시설계용역 준공: ‘22. 6.

○ 주민설명회 및 주민협의(2회): ‘21. 10. ~ ’22. 5.

○ 계약심사: ‘22. 6.

○ 공사발주: ‘22. 7.