제2절		특수공시 항목

연번	사 업 명	부 서	비고
계	9건
1	두륜산 생태 힐링파크 조성사업	관광실
2	농촌협약	미래공동체과
3	해남땅끝가족어울림센터 건립	가족행복과
4	해남 군민광장 조성	재무과
5	농업 근로자 기숙사 건립	농정과
6	어촌뉴딜300 사업	해양수산과
7	김치원료공급단지 구축사업	유통지원과
8	원활한 차량 소통을 위한 회전교차로 조성	건설도시과
9	농기계 임대사업소 본소 이전	농업기술센터

	계 속

1

두륜산 생태 힐링파크 조성사업

	사 업 개 요(2021~2024)
• 위 치: 해남군 삼산면 구림리 138-19번지 일원 • 사 업 량: 생태 힐링파크 조성 1식 / 15,299㎡ • 총사업비: 4,900백만원(도비 2,450 / 군비 2,450) • 주요내용: 카트레이싱, 사계절썰매장, 힐링정원, 산책로 등 조성

추진방침

○ 관광시설 노후화 및 체험 놀이시설의 부재로 정체된 두륜산권 관광의 변화 필요

○ 두륜산권의 빼어난 자연환경 속에서 즐기는 가족 단위 관광객들을 위한 힐링·체험의 관광명소 조성

추진실적

○ 기본 및 실시설계 용역	'21. 5. ~ '22. 12.

○ 소규모 환경영향평가 협의	'22. 7.

○ 도 계약심사 및 산지전용 협의	‵22. 11.

이후 추진계획

○ 1차분(기존 시설물 철거) 공사 추진	‵22. 1. ~ ‵22. 3.

○ 2차분(시설물 조성) 공사 추진	‵22. 3. ~ ‵24. 3.

○ 부대공사(전기, 통신, 소방) 추진

○ 3차분 공사(조경) 추진	‵24. 1. ~ ‵24. 3.

○ 사업 총괄 준공 및 운영	‵24. 3. ~

추진부서	관광실 관광개발팀 (☏5799)

	신 규

2

농촌협약

	사 업 개 요(2022~2027)
• 위 치: 해남군 일원 • 협약규모: 42,900백만원(국비 30,000, 군비 12,900) • 협약주체: 농림축산식품부, 해남군 • 협약효력: 농식품부는 협약에 근거 정부사업을 패키지로 지원하며, 지자체는 협약내용과 사업목적에 맞게 사업 추진 • 협약대상: 농촌생활권 활성화 계획

추진방침

○ 농촌공간에 대한 종합적 계획 마련과 투자로 사업간 연계성 강화

○ 농식품부와 정책적 협력 거버넌스 구축으로 지방분권 시대 효과적 대응

추진실적

○ 농촌공간전략 및 생활권활성화계획 수립	‵22. 4.

○ 공모신청	‵22. 5.

○ 평가 및 공모선정	‵22. 6.

○ 농촌공간전략 및 생활권활성화계획 보완	‵22. 12.

이후 추진계획

○ 협약체결(해남군↔농식품부)	‵23. 4.

○ 기초생활거점조성사업 기본계획 수립	‵23. 7. ~ ‵24. 7.

○ 기초생활거점조성사업 시행계획 수립	‵24. 8. ~ ‵25. 8.

○ 기초생활거점조성사업 H/W 추진	‵25. 8. ~ ‵27. 8.

○ 기초생활거점조성사업 S/W 추진	‵24. 8. ~ ‵27. 12.

추진부서	미래공동체과 마을활력팀 (☏5432)

	계 속

3

해남군 가족어울림센터 건립 및 운영

	사 업 개 요
• 위 치: 해남읍 서림길 6-20(구교리 346-1) • 사 업 량: 1식(지하1층, 지상4층 / 연면적: 4,237.39㎡) • 총사업비: 148억 원(국비 31, 도비 2, 군비 115) • 주요내용: 생활SOC 복합화 사업으로 다양한 가족유형에 맞는 통합 가족지원 서비스 제공 - 주요시설: 해남군 가족센터, 공동육아나눔터, 국공립어린이집, 다함께 돌봄센터, 장난감도서관, 실내놀이터 등

추진방침

○ 맞춤형 복합서비스 제공, 소통과 화합을 위한 가족어울림 공간 조성

추진실적

○ 골조공사 완료	‵22. 7.

○ 지중화사업 신청(한전 및 통신사)	‵22. 7.

○ 운영계획 수립	‵22. 8.

○ 해남군 가족어울림센터 설치 및 운영 조례 제정	‵22. 9.

○ 군의회 민간위탁 동의	‵22. 9.

○ 민간위탁 기관 선정(사회복지법인 두성재단)	‵22. 10.

○ 사무용가구, 가전 등 구입 계획 수립 및 발주	‵22. 11.

이후 추진계획

○ 해남군 가족어울림센터 준공	‵23. 1. 19.

○ 개관 및 운영	‵23. 3. ~

- 해남군 가족어울림센터 개관식 개최	‵23. 4. 7.

추진부서	가족행복과 양성정책팀 (☏5724)

	계 속

4

해남 군민광장 조성

	사 업 개 요(2020~2022)
• 위 치: 구 청사 일원 • 사 업 량: 14,789㎡(광장 조성) • 총사업비: 4,600백만원(군비) - 지금까지 투자사업비: 2,600백만원(군비) - 2022년도 소요사업비: 2,000백만원(군비) • 주요내용: 광장조성(1단계: 구청사 철거구간) - 수성송 보호 방풍림(휴게쉼터), 광장 포장 등

추진방침

○ 구청사 철거공간에 수성송 보호와 순수광장 역할의 군민광장 조성

○ 기존 군민광장은 군민들의 요구사항과 필요성을 면밀히 검토 후 추후 추진

추진실적

○ 공사 착공	‵22. 1. ~ 7.

- 기반시설 정비(우수관로 및 전기·통신설비 등)	‵22. 1. ~ 2.

- 수목 식재 및 조경구조물 설치	‵22. 3.

- 광장 포장 및 편의시설물 설치	‵22. 4. ~ 5.

- 주변 보차도 정비 및 도로 포장	‵22. 6.

○ 해남읍성 보수 및 주변정비	‵22. 1. ~ 4.

- 내측 읍성 설치 및 노거수 주변 정비

기대효과

○ 군민 생활 광장 조성으로 군민 자긍심 고취

○ 군민들을 위한 휴식 및 문화 활동 공간 조성으로 삶의 질 향상

추진부서	재무과 재산관리팀 (☏5276)

	계 속

5

농업 근로자 기숙사 건립

	사 업 개 요(2022~2024)
• 위 치: 해남군 황산면 옥동리 920-6번지 외 1필지 • 사 업 량: 1개소(3층 / 100명 이내 수용규모) • 총사업비: 4,700백만원(국비 1,200, 도비 360, 군비 3,140) • 주요내용: 내외국인 근로자 주거 안정을 통한 농촌인력 확보

추진방침

○ 내외국인 근로자의 안정적․체계적 관리와 주거환경 개선을 통해 농촌인력 수급 확대

추진실적

○ 공모사업 선정(농식품부)	‵22. 1. 28.

○ 공공건축 사업계획 사전검토 용역	‵22. 6. 22.

○ 공유재산 심의	‵22. 7. 7.

○ 중기 재정계획수립 및 투융자 심사	‵22. 8. 5.

○ 공공건축 사업계획 사전검토(건축공간연구원)        ‵22. 8. 24.

○ 설계용역 계약심사                                ‵22. 9. 5.

○ 공공건축심의위원회 심의                          ‵22. 10. 7.

○ 건축설계 공모 시행공고                           ‵22. 11. 21.

이후 추진계획

○ 건축설계 공모안 심사위원회 개최(설계업체 선정)    ‵23. 1.

○ 기본 및 실시설계 용역 발주 계약체결	‵23. 2.

○ 기본 및 실시설계 용역 최종보고회	‵23. 7.

○ 건축공사 업체 선정 및 계약체결	‵24. 1.

○ 준공	‵24. 10.

추진부서	농정과 농촌인력팀 (5075)

	계 속

6

어촌뉴딜 300사업 추진

	사 업 개 요(2019~2023)
• 위 치 - (화산) 구성·관동항, (현산) 두모항, (황산) 성산항, (송지) 갈산·어불·동현항 (북평) 남성항 (문내) 임하항 일원 • 사 업 량: 9개소(‘19년 2개소, ‘20년 3개소, ‘21년 2개소, ‘22년 2개소) • 총사업비: 74,852백만원(국비 52,396, 도비 6,737 군비 15,719) - 지금까지 투자사업비: 34,953백만원(국비 24,466, 도비 3,146, 군비 7,341) - ’22년도 소요사업비: 18,202백만원(국비 12,741, 도비 1,638, 군비 3,823) • 주요내용 - 공통사업(방파제, 물양장 등 어업기반시설) - 특화사업(소득사업 및 어촌 체험시설 설치)

추진방침

○ 낙후된 어촌․어항 개발로 수산업 기반시설 확충

○ 어촌마을 잠재력 개발로 어촌의 재생과 성장 견인

추진실적

○ 2019년 (화산 구성항, 현산 두모항)

- 특화사업(어업인회관 등 건축공사)착공	‵22. 1. ~ 10.

- 총괄준공	‵22. 12.

○ 2020년 (황산 성산항, 송지 갈산항, 북평 남성항)

- 공통사업(다목적방파제, 물양장 등) 추진	‵22. 1. ~ 10.

- 특화사업(어업인회관 등 건축공사)착공	‵22. 10.

○ 2021년 (화산 관동항, 송지 어불항)

- 공통사업(다목적방파제, 물양장 등) 착공	‵22. 7.

○ 2022년 (송지 동현항, 문내 임하항)

- 기본계획 심의 승인(해수부)	‵22. 12.

이후 추진계획

○ 2020년 전체사업 준공	‵23. 12.

○ 2021년 특화사업 착공	‵23.  8.

○ 2022년 생활SOC사업 착수	‵23.  7.

추진부서	해양수산과 해양개발팀(5417)

	계 속

7

김치원료공급단지 구축사업

	사업개요(2022 ~ 2025)
• 위 치: 산이면 구성리 641(솔라시도지구) • 사 업 량: 1개소 / 72,000㎡ • 총사업비: 29,000백만원(국비 11,600, 도비 5,220, 군비 12,180) • 주요내용: 김치원료 공급단지 인프라 구축 - 저온저장시설, 절임배추 가공시설, 절임염수재활용시설 등

추진방침

○ 안정적 원료 수급 환경조성 등 김치산업의 고부가가치화를 위한  인프라 구축

추진실적

○ 공모사업 선정	‵22. 8.

○ 지방재정 투자심사 승인	‵22. 12.

○ 사업부지 변경 승인	‵22. 12.

이후 추진계획

○ 공유재산 심의 원안 가결	‵23. 1.

○ 공공건축 사업계획 사전검토 의견서 통지	‵23. 3.

○ 기본계획 및 타당성조사 용역 완료	‵23. 5.

○ 공공건축기획 사업 완료	‵23. 6.

○ 실시설계 추진	‵23. 7.

○ 예산 수립(2회 추경) 및 부지매입	‵23. 9.

○ 공사 착공	‵24. 1.

○ 공사완료 및 사용승인	‵25. 12

추진부서	유통지원과 농식품산업팀 (☏5435)

	계 속

8

원활한 차량 소통을 위한 회전교차로 조성

	사 업 개 요(2020~2023)
• 위 치: 해남읍 일원 • 사 업 량: 교통광장(회전교차로) 조성 4개소 • 총사업비: 1,720백만원(국비 140, 도비 280, 군비 1,300) - 지금까지 투자사업비: 740백만원(국비 140, 군비 600) - 2022년도 소요사업비: 980백만원(도비 280, 군비 700) • 주요내용: 교통광장 및 회전교차로 조성, 차도 및 인도 확장 등

추진방침

○ 도시기반시설 확충으로 품격 있는 생활공간 및 원활한 교통망 확보

○ 해남읍 시가지 교통난 해소 및 도시 이미지 개선

추진계획

○ 사업완료

- 버스터미널 회전교차로 조성사업	‵22.  4.

○ 공사추진

- 법원사거리 회전교차로: 측구 및 인도 설치

- 학동 회전교차로: 착공 및 지장물 조사

○ 보상협의 중

- 해남공원 사거리 회전교차로

이후 추진계획

○ 법원사거리 회전교차로 조성사업 준공	‵23.  3.

○ 해남읍 학동 회전교차로 조성사업 준공	‵23.  7.

○ 해남공원 사거리 회전교차로 실시설계 준공	‵23.  6.

추진부서	건설도시과 도시계획팀 (☏5252)

	일 반

9

농기계 임대사업소 본소 이전

	사 업 개 요(2021~2023)
• 위 치: 해남군 해남읍 용정리 303-1 외 7필지 / 5,211㎡ • 사 업 량: 1동(2층) / 연면적 977.24㎡ • 총사업비: 2,500백만원(군비) • 주요내용: 농기계임대사업소 운영 및 농기계 현장실무·안전교육, 임대농기계 셀프 작업장 운영

추진방침

○ 농기계 조작법과 농작업 능률 향상을 위한 교육 공간 확보

○ 이용 농업인 농기계 사고 방지 및 불편 해소와 영농편의 제공

추진실적

○ 본소 이전 추진 계획수립                 ‵21. 6.

○ 기본 및 실시설계용역                    ‵21. 11. ~ ‵22. 4.

○ 신축 공사 발주 계획보고                 ‵22. 9.

○ 공종별 업체 계약 및 협의회              ‵22. 10.

○ 신축 공사 착공                          ‵22. 10.

- 건축, 전기, 소방, 폐기물, 통신

이후 추진계획

○ 신축 공사 준공                          ‵23. 3.

○ 농기계임대사업소 본소 운영              ‵23. 4. ~

- 임대농기계 구입, 교육장비 및 운영물품 구입 등

추진부서	농업기술센터 농기계팀 (☏3875)